SERVIZIO LAVORI SPECIALI

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
S.P. N.569 DI VIGNOLA - VARIANTE ALL’ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO. COMPLETAMENTO SVINCOLO A ROTATORIA SULLA S.P. N.623 DEL PASSO BRASA IN COMUNE DI SPILAMBERTO
-APPROVAZIONE PREVENTIVO INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE IN BASSA TENSIONE
-APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
-AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. 

Con convenzione sottoscritta il 28.04.2004, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’ANAS, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena hanno stabilito di trasferire a quest’ultima la competenza diretta e le relative risorse per la gestione di alcuni cantieri di grande importanza in precedenza in carico all’ANAS;
Fra i cantieri trasferiti risultano i lavori di costruzione della variante all’abitato di Vignola sulla S.P. n.569 “di Vignola” con nuovo ponte sul fiume Panaro.

Con contratto rep. N. 54229 del dott. Leonardo Milone, notaio in Roma, stipulato fra l’ANAS S.p.a.  e l’Impresa Turchi Cesare S.r.l. mandataria  dell’A.T.I. Turchi Cesare S.r.l. – Piacentini Costruzioni S.p.a. – SO.CO.GEN. S.p.a. – Zaccaria Costruzioni S.r.l., i lavori in oggetto venivano affidati a quest’ultimi, in seguito a licitazione privata, per un importo contrattuale netto di € 8.488.538,76, corrispondente a un ribasso d’asta del 24,24153%.

I lavori sono iniziati sotto la direzione dell’Anas il 08.4.2003 e sospesi il 19/01/2004 e sono ripresi il 27/06/2005 a cura della Provincia di Modena.

Per la realizzazione dell’opera in oggetto è stata individuata l’interferenza della linea elettrica aerea in bassa tensione con la nuova rotatoria di collegamento con la via Vignolese ed è stato richiesto il preventivo per il suo interramento ad HERA Spa viale Berti Pichat 2/4 40100 Bologna p.iva: 04245520376 che ha inviato il preventivo n. 0020157364 assunto agli atti della Provincia con prot. 106879/7.5.569.2 fasc. 6/14 del 22/10/2008 per nette € 3.607,78 oltre all’IVA al 20% pari a €721,56 per complessivi € 4.329,35.

La Provincia di Modena ha inoltre richiesto il preventivo per la fornitura di energia elettrica per l‘impianto di illuminazione pubblica della rotatoria ad HERA Spa viale Berti Pichat 2/4 40100 Bologna p.iva: 04245520376 che ha inviato il preventivo n. 0020155695 assunto agli atti della Provincia con prot. 102654/7.5.569.2 fasc.6/14 del 10/10/2008 per nette  € 1.334,25 oltre IVA al 20% pari ad € 266,85 per complessivi € 1.601,10.

La spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori rientra nella prenotazione effettuata all’azione n. 3630 “Nuovo Ponte di Vignola” del P.e.g. 2005;

Per quanto precede
il dirigente determina

1)	di approvare il preventivo di Hera Spa per l’interramento della linea elettrica in bassa tensione per complessive € 4.329,35 IVA compresa come in premessa riportato;
2)	di approvare il preventivo di HERA Spa per la fornitura di energia elettrica per l’illuminazione pubblica per complessive €1.601,10 IVA compresa come in premessa riportato;
3)	Di impegnare la spesa totale di € 5.930,35 all’azione n. 3630 “Nuovo Ponte di Vignola” del PEG 2008.
4)	Di affidare i lavori dell’importo dei  preventivi pari a  € 4.942,04 di lavori, oltre l’IVA al 20% pari a € 988,41 per complessive € 5.930,35 ad HERA Spa viale Berti Pichat 2/4 40100 Bologna p.iva: 04245520376
5)	di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del dott. Ing. Alessandro Manni.

[INTESTAZIONE_PDF_2]