AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del  [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO - MIGLIORAMENTO SISMICO. PROGETTO ESECUTIVO 1^ E 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO, MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA. APPROVAZIONE 1. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.  

Con determinazione dirigenziale n. 92 del 15/7/2009 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori  in oggetto per un importo complessivo di € 1.200.000,00  di cui € 900.900,00 a base d’asta, così riportato.

	QUADRO ECONOMICO			
A)	OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21	 €       842.436,78 	 	
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	 €         58.463,22 	 	
 	 	 	 €       900.900,00 	
 	 	 	 	
C)	IMPREVISTI 	 €         84.243,68 	 	
D)	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, DL	 €       100.000,00 	 	
E)	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE  [2%] 	 €         18.018,00 	 	
F)	I.V.A ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE  [10%]	 €         90.090,00 	 	
G)	ARROTONDAMENTI , PUBBLICITA' E TASSE AUTORITA'	 €           6.748,32 	 	
 	 	 	 €       299.100,00 	
 	 	 	 	
 	TOTALE	 	 €    1.200.000,00 	

Con la medesima determinazione si individuava, quale modalità  di scelta del contraente, la procedura aperta da esperirsi ai sensi degli art. 54 e 55 del D.lgs 163/06,  con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.

Con DETERMINAZIONE  n°  37 del 24/02/2010 si affidavano  lavori in oggetto, all’Impresa LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L. (mandataria)  con sede a Bologna, Via Augusto Murri n. 77/3 - Cod. Fisc. 00579330804 e P.IVA 04333740373 in Associazione temporanea d’Impresa con la ditta RES. IN TEC ITALIA S.R.L. con sede a Corporeno, Frazione di Cento (FE) Via Statale n. 88, Cod. Fisc. e P.IVA 01536260381 la quale ha offerto un ribasso percentuale del 22,351% e quindi un importo contrattuale netto di € 712.606,96 (di cui € 654.143,74 per lavori, € 58.463,22 per oneri di sicurezza).  
	
La somma complessiva di euro 1.200.000,00, come da determinazione n. 92 del 15/7/2009,  TROVAVA  copertura finanziaria all’azione n. 4079 “ITCG  Baggi di Sassuolo - Adeguamento sismico – Quota Provincia” del PEG 2009 per euro 600.000,00 al res. 5493/08 dell’art. 1 (bop 624) e per € 600.000,00 alla prenot. n.1629/09  dell’art.2 (bop 625)

I lavori sono stati consegnati il 01/03/2010 come risulta dal verbale prot. 6/2010 del 26/02/2010, cosicché l’ultimazione dei lavori, tenuto conto della sospensione dei lavori intervenute durante i lavori,  doveva  avvenire entro il 13/01/2011.

                Nello svolgimento delle lavorazioni si è presentata la necessità di apportare provvedimenti di   Modifiche/integrazioni per alcune lavorazioni riguardanti  alcuni corpi d'opera. Tali provvedimenti hanno 
riguardato in parte anche gli aspetti strutturali ma tali modifiche sono da  ritenersi rientranti nei limiti di discrezionalità della D.L. e da essere  percentualmente minime e non significative sul comportamento e sulla 
duttilità globale della struttura (varianti non essenziali), che si sono  rese necessarie anche in virtù dei lavori futuri inerenti al 3° stralcio, in  accordo con l'Amministrazione.

                La variante in corso d'opera è stata approntata per le motivazioni di seguito esplicitate, ai sensi dell'art. 132 punti b) e c) del  D.lgs 163/06 e s.m.i.:

•	Cause geologiche - Per cause impreviste e imprevedibili (in terreni a grana grossa, c’è stato il rinvenimento di stratificazioni di materiali lapideo di grossa pezzatura, posto a profondità casuale, non identificabili in fase di indagini geologiche localizzate) ovvero per manifesta difficoltà d’esecuzione derivanti da cause geologiche e simili, sicuramente non prevedibili in fase di progetto (articolo 1664, comma 2, del codice civile).

•	Specificità dei beni - Era prevista la demolizione di pareti nel sottotetto per  assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (sottotetto) durante le operazioni di montaggio e saldature di strutture metalliche. Tuttavia nonostante tali demolizioni previste in fase progettuale e la ventilazione forzata del sottotetto, la presenza di materiali inquinanti (amianto incapsulato) rendono impossibile la realizzazione di ulteriori aperture nella copertura; pertanto per evitare danneggiamenti alla copertura in amianto, ed ulteriori inquinamento dell’ambiente di lavoro, esso deve essere rimossa preliminarmente ad ogni altra lavorazione e movimentazione di materiali con la gru.

Così sono stati previsti i seguenti interventi che consisteranno in:

•	La conformazione dei conci prefabbricati della veletta della copertura (visibile solo dopo le demolizioni) rende necessario l’estensione della demolizione della veletta del cornicione fronte B.
•	A causa del rinvenimento di stratificazioni di materiali lapidei di grossa pezzatura, disposti planimetricamente ed in profondità casuali, pertanto non individuati nelle indagini geologiche, le fondazioni profonde sono state modificate nella volumetria. I pali di fondazione, a parità di diametro teorico di trivellazione, hanno impegnato maggiori volumi di calcestruzzo. La trivellazione standard di progetto è risultata comunque più economica di altre metodologie, con fanghi o rivestimenti metallici.
•	A parità di resistenza e duttilità degli interventi previsti in progetto, per ridurre i danni alle opere non strutturali – impiantistiche – infissi, è stata mutata solamente la scelta tecnologica dell’intervento sui pilastri da incamiciatura classica a beton plaquè. Pertanto, con la tipologia stretta la variazione è certamente non sostanziale.
•	Il calcestruzzo delle travi di collegamento dei plinti, ha subito una variazione di volume in quanto la sagoma delle strutture esistente a 2.5 m di profondità non era corrispondente a quanto riportato nei disegni in archivio dell’amministrazione pertanto c’è stato un piccolo incremento di volume di calcestruzzo provocato dallo spostamento alla base dei pali e di conseguenza di tutto quanto ad essa connesso plinti-travi-setti (casseforme, acciaio, cls, ancoraggi). 
•	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione costituita da guaina prefabbricata per rivestimento delle n.13 e n.14.
•	Tinteggiatura di superfici esterne nelle zone  delle n.13 e n.14. 
•	Consolidamento solai – come da progetto esecutivo, ma con incremento di spessore ed armatura  e cuciture a causa delle fessurazioni emerse durante la fase di demolizione ove si sono riscontrati anche difetti macroscopici nei getti delle strutture dei solai esistenti. Ripristino dei solai in corrispondenza delle scale interne. 
•	Ripristino delle scossaline in lamiera di alluminio pressopiegato prevernicata sulle coperture – attacco vecchi nuovi pilastri per sostituire elementi rivelatisi deteriorati all’atto delle demolizioni. L’intervento costituisce una notevole miglioria per le strutture in c.a. in quanto ne allunga notevolmente la protezione contro ghiaccio e acque meteoriche.
•	Per l’imprevisto intervento sul tetto per la rimozione in sicurezza dell’amianto è stata ampliata l’ampiezza del ponteggio di facciata. 
•	A causa della riduzione dei tempi di realizzazione delle nuove strutture di facciata è stato ridotto il tempo di installazione del ponteggio.
•	Ulteriori oneri per la sicurezza legati al Corpo d’opera 4 e piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta (art. 256 D.Lgs. 81/08) di cui alla premessa della relazione 
•	Rimozione lastre di amianto e ricollocazione lamiera grecata secondo il Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenente amianto in matrice compatta (art. 256 D.Lgs. 81/08) di cui alla premessa della relazione.
•	Fornitura e posa in opera di lamiera grecata ad integrazione dei fogli deteriorati e non ricollocabili.

Sentiti il Responsabile del Procedimento ed i progettisti, il Direttore dei Lavori, nonché coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, ha provveduto a disporre la redazione di una perizia di variante e suppletiva finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. b) e c), nonché comma 3 della legge 163/06 e successive modifiche ed integrazioni per un importo netto di   € 863.470,74    di cui € 62.314,01    per oneri per la sicurezza, con un aumento complessivo, rispetto al quadro economico da contratto originario pari a €150.863,78.
La ditta LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L. (mandataria)  con sede a Bologna, Via Augusto Murri n. 77/3 - Cod. Fisc. 00579330804 e P.IVA 04333740373 in Associazione temporanea d’Impresa con la ditta RES. IN TEC ITALIA S.R.L. esecutrice dei lavori principali, interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.
Dato atto che quanto sopra descritto si modifica il nuovo quadro economico come segue:

NUOVO QUADRO ECONOMICO (a seguito di 1°perizia)

 	 nuovo quadro economico 	
 	 	
LAVORI	 	
Importo lavori 	 €   801.156,73 	
Importo netto lavori: perizia di variante suppletiva 	 	
Oneri per la sicurezza	 €    62.314,01 	
Totale lavori appalto	 €   863.470,74 	
 	 	
SOMME A DISPOSIZIONE	 	
IVA (10%) sui lavori 	 €    86.347,07 	
Spese di progettazione 2,0% del totale lavori	 €    21.035,28 	
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COLLAUDO, DL	 €   104.363,78 	
Imprevisti 	 €          -   	
ARROTONDAMENTI , PUBBLICITA' E TASSE AUTORITA'	 €       404,89 	
altri ilavori connessi alla esecuzione	 €    38.058,49 	
Somme ulteriori per ribasso, IVA, arrotondamenti e collaudo	 €    86.319,75 	
 	 	
Totale somme a disposizione	 €   336.529,26 	
 	 	
TOTALE COMPLESSIVO	 € 1.200.000,00 	

Il responsabile del procedimento è l’Ing Alessandro Manni, Direttore d’Area dei Lavori Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it.Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Ing. Alessandro Manni.

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1)	di approvare la 1° perizia di variante e suppletiva per le motivazioni in premessa indicate redatta dal direttore dei lavori in data 16/07/2010 ai sensi dell’art. 132 commi 1 lett. b) e c) e 3 della L. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ed il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
2)		di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione sono acquisiti agli atti regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
3)		di affidare l’esecuzione dei nuovi maggiori lavori all’impresa all’impresa all’Impresa LOMBARDO PASQUALE E FIGLI S.R.L. (mandataria)  con sede a Bologna, Via Augusto Murri n. 77/3 - Cod. Fisc. 00579330804 e P.IVA 04333740373 in Associazione temporanea d’Impresa con la ditta RES. IN TEC ITALIA S.R.L. con sede a Corporeno, Frazione di Cento (FE) Via Statale n. 88, Cod. Fisc. e P.IVA 01536260381 la quale ha offerto di eseguirli agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto d’appalto   n.28006 del 03/05/2010 registrato in Modena, giusto schema di atto di sottomissione firmato dalla Ditta capogruppo per accettazione;
4)		di dare atto che a seguito della perizia di variante e suppletiva in oggetto l’importo contrattuale netto passa da € 712.606,96 ad € 863.470,74 con un aumento di lavori netti di  150.863,78 €   pari al 21% dell’importo contrattuale iniziale; 
5)	di dare atto che si concedono ulteriori 75 (diconsi settantacinque) giorni lavorativi rispetto al contratto originario e pertanto, in virtù delle sospensioni e riprese dei lavori intervenuti durante l’itinere dei lavori, il nuovo termine dei lavori contrattuale è fissato così per il 30/03/2011;
6)		di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento iniziale;
7)		di impegnare pertanto la maggiore spesa di  150.863,78 €,   per lavori ed  €150.86,37   per IVA al 10% all’azione 4079  “ITCG  Baggi di Sassuolo - Adeguamento sismico” del PEG 20109;
8)		di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

		[INTESTAZIONE_PDF_2]

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                    _________________