AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del  [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :	TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI VIGNOLA - ANNO 2009.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI.

Con determinazione n. 65 del 12/05/2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 71.000,00;
La spesa complessiva di €. 71.000,00 veniva finanziata con entrate ordinarie di Bilancio previste all’azione n. 245 “Segnaletica Orizzontale” del PEG 2009;
Con medesima determinazione n. 65 del 12/05/2009 si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori a mezzo di trattativa privata previa gara ufficiosa da esperirsi con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;
Con Determinazione n. 113 del 03/07/2009 si aggiudicavano i lavori in oggetto all’impresa SI.SE. s.r.l. Via dell'Industria n. 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), la quale offriva un ribasso percentuale del 5,95%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 54.290,89 di cui €. 53.290,89 per lavori ed €. 1.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto RSP n. 2081 del 19/10/2009;
I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 06/10/2009, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;
Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data xx/05/2010, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 54.290,54 con una minore spesa di €. 0,35 rispetto all’importo contrattuale;
L’importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 65.148,65 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d’asta	€            53.290,54	
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€              1.000,00	
	-------------------------	
Sommano	€  	  54.290,54	
Per IVA al 20%	€	  10.858,11	
	-------------------------	
Sommano	€	  65.148,65	

Rispetto all’importo complessivo impegnato di €. 65.149,07 si realizza un’ economia pari a €. 0,42;
Considerato che in corso d’opera è stato corrisposto all’impresa n. 1 stato d’avanzamento lavori per complessivi €. 59.591,51 pertanto rimane un credito residuo di €. 5.557,14 (€. 4.630,95 per lavori ed €. 926,19 per IVA);
Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva, in data 06/04/2010 C.I.P. n. 20100874961887, il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali.
A seguito di tale richiesta giungeva da parte dell’INAIL di Mantova risposta in merito con esito positivo assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 41859/7.4.1 del 23/04/2010 dal quale risulta che l’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 06/10/2009, sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva;
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data xx/05/2010;
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .
Per quanto precede,

I l   D i r i g e n t e   D e t e r m i n a

1.	Di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 54.290,54 di cui €. 53.290,54 per lavori e €. 1.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 0,35 rispetto all’importo contrattuale pari a €. 54.290,89 in esecuzione del contratto RSP n. 2081 del 19/10/2009;
2.	Di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 65.148,65 di cui €. 530290,54 per lavori, €. 1.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 10.858,11 per IVA al 20%, con una minore spesa di €. 0,42 rispetto all’importo impegnato pari a €. 65.149,07;
3.	Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. __________/___________ del ______________ regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;
4.	Di approvare il saldo finale dei lavori;
5.	Di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 54.290,54 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa SI.SE. s.r.l. Via dell'Industria n. 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), aggiudicataria dei lavori per un importo di €. 49.659,59 rimanendo pertanto €. 4.630,95  oltre a €. 926,19 per I.V.A. 20% a credito dell’impresa;
6.	Di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 5.557,14 all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all’Azione n. 245 “Segnaletica Orizzontale“ Res. 2169/09 (Sub. res. 1190/09) del PEG 2010;
7.	di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 0,42 che si libera all’azione succitata;
8.	Di evidenziare che rispetto al quadro economico del progetto esecutivo di seguito riportato

	Progetto	Lavori eseguiti	
	Euro	Euro	
Importo lavori	56.662,30	53.290,54	
oneri per la sicurezza	1.000,00	1.000,00	
	-------------	-------------	
Sommano per lavori	57.662,30	54.290,54	
Somme a disposizione:			
I.V.A. 20%	11.532,46	10.858,11	
Spese tecniche	1.153,25	1.153,25	
Prove di laboratorio	650,00		
Arrotondamenti		1,99		
	-------------	-------------	
Totale somme a disposizione	13.337,70	12.011,36	
	-------------	-------------	
Importo complessivo	71.000,00	66.301,90	

si possono liberare €. 4.698,10 sull’Azione n. 245 “Segnaletica Orizzontale“ Res. 2169/09 (Sub. res. 1190/09) del PEG 2010 che verranno utilizzati con successivo apposito atto;
9.	Con determina n. 113 del 03/07/2009 sono stati liberati €. 4.047,68, rimangono pertanto da liberare €. 650,42 sulla sopraccitata azione;
10.	Considerando che, in accordo con la ditta Elletipi s.r.l. di Ferrara, si è deciso di mantenere impegnato l’importo di €. 650,00 relativo alle prove di laboratorio (prove da eseguirsi per i lavori relativi all’anno 2010); l’importo da liberare sull’azione è pari ad €. 0,42;
11.	Di approvare la restituzione della cauzione di €. 2.715,00 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 69/02/800518235 rilasciata dalla Carige Assicurazioni S.p.A. – agenzia 1404 di Roma Speciale – in data 26/08/2009 pari al 10% dell’importo del presente contratto);
12.	Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta SI.SE. s.r.l. Via dell'Industria n. 41 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN).

		[INTESTAZIONE_PDF_2]

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                    _________________